2010 진주실크 박람회 전시장치 시공내역

1. 박람회 기본일정

○ 전체기간 : 2010.  9. 27(월) ~ 10. 11(월)

○ 텐트 및 부스설치 : 2010.  9. 27(월) ~ 10. 2(토)

○ 전시품 반입 및 디스플레이 : 2010. 10. 2(토)

○ 전시기간 : 2010. 10.  3(일) ~ 10. 10(일)

○ 부스철거 : 2010. 10. 11(월)

※ 기본일정은 추후 변동될 수 있음

2. 박람회 장소

○ 박람회장 소재 : 경남 진주시 칠암동 경남문화예술회관 앞 고수부지(첨부파일참조)

○ 규모 : 대형 텐트(폭15m× 길이85m)와 좌우 출입구

3. 장치내역 및 범위

○ 대형 특수 텐트 공사 : AL-HALL, T.F.S텐트 등

○ 전시 및 판매 부스 공사

- 기업관(업체 전시 및 판매), 전시관(트렌드 포럼, 패션, 홍보물), 제15회 진주실크디자인 경진대회 수상작 전시관

○ 전기조명, 동력간선, 계량기 설치, 텐트 조명, 물막이 공사(우천시 대비), 바닥공사(현재 잔디, 흙, 자갈 등으로 되어 있음), 파이텍스 시공, 환풍, 냉난방 시설 등 박람회 전반적인 장치시공

※ 행사장 주변에 2000kw 용량의 변전소 있음

○ 전시장 홍보장치물 제작

- 출입구아치 2, 현황판, 인포메이션 데스크2, 카다록 꽃이, 각종 배너, 유도싸인

○ 참가업체가 희망하는 추가 기자재 제공

○ 현지 책임자 및 직원 상주

○ 주최측에서 지정한 기일내에 공사완료 및 철거

○ 청소 및 전시장 관리

○ 전시장내 조경

4. 세부내역 및 사양

1) 기업관 (실크업체 전시 판매관)

○ 규모 : 폭15m× 길이45m(예정)

○ 부스수량 : 40개 부스(추후 조정)

○ 부스규격 : 3m×3m 내외(높이 2.5m)

○ 구성 : 실크관련 생산 및 완제품 업체(직물, 홈인테리어, 액세서리 등) 일체

○ 1부스 구조물 내역 : 백색 칸막이 3m×3m, 회사상호 간판 1, 아크릴 부스 번호판 1, 콘센트 2구(220V) 1, 형광등 3, 스포트라이트 3, 인포메이션 데스크 1, 상담테이블 1, 의자 3개, 바닥 파이텍스, 디스플레이용 행거1, 매쉬 2, 선반1

○ 제작방법 : 조립식 부스 디자인 및 공사

※ 바닥 파이텍스 및 상호간판, 부스번호판 칼라 등은 추후협의

2) 전시관(트렌드 포럼, 패션, 홍보물 통합 전시)

○ 규모 : 폭15m × 길이20m (예정)

○ 내용

① 트렌드 이미지 및 소재

- 2011 F/W 트렌드 정보제공(trend watch, color, fabric)

- 진주지역에서 개발된 신소재 중심으로 박람회 테마에 맞는 남성복, 여성복, 한복(남, 여), 인테리어, 이너웨어 등의 소재 200점 이상 전시

② 완제품

- 패션 제품 20 ~ 30점 전시

- 스카프 제품 20여점 전시

③ 홍보물

- 진주실크 혁신센터 주요내용 및 진주실크 홍보 동영상 상영

○ 구조 : 전시대 및 구조물. 실사 출력물 포함, PDP 2대 이상 설치

○ 제작방법 : 목재, 유리 또는 아크릴로 혼합

3) 제15회 진주실크 디자인 경진대회 수상작 전시관

○ 규모 : 폭15m × 길이20m (예정)

○ 내용 : 우드락(가로 60×세로90㎝) 작품 200여점, 초대작품(액자 및 소품) 16점, 실크소품 20여점(소품은 추후 약간의 수량 변동 가능) 전시

○ 구조 : 전시대 및 구조물, 소품 전시대는 분실대비 상단은 유리 및 아크릴관

○ 제작방법 : 조립식 부스 자재로 처리

4) 부대시설

○ 입구아치 2조

- 위치 : 전시장 출입구

- 제작방법 : 목재, 조명장치

○ 현황판

- 위치 : 전시장 입구 등(추후지정)

- 내용 : 전시회 개요, 전시장 Layout, 부스MAP, 참가업체명, 부대행사 일정 등

○ 홍보 시안물 및 홍보장치

- 위치 : 2010 진주실크 박람회 대형 텐트 외부(전시시간 참조)

○ 인포메이션 데스크 2조

- 위치 : 전시장 내 출입구 등(추후지정)

- 내용 : 인포메이션 카다록 꽂이 비치(기 제작품 렌트 가능) 등

- 제작방법 : 조립식 부스 자재로 처리

○ 개막식 공간 및 구조물

- 위치 : 전시장 입구 야외 예정(추후지정)

- 내용 : 개막식 단상 등

- 규격 : 추후협의

○ 휴게공간 및 전시장내 조경

- 위치 : 추후지정

- 용도 : 관람객 휴게 공간으로 사용

○ 카페테리아

- 용도 : 관람객 휴게공간 및 관람객들에게 간단한 식음료 제공(유료)

- 위치 및 규모 : 전시장내 2~3개 부스 규모

- 내용 : 테이블 및 의자, 카다록 꽂이, 조명 및 콘센트, 냉온수기 설치 등

○ 비즈니스센터(바이어 상담)

- 용도 : 바이어 비즈니스 공간으로 활용

- 내용 : 원형 상담테이블 및 의자

○ 현수막 및 옥내배너 (엑스배너 포함)

- 용도 : 전시장 안내 및 동선유도

- 제작방법 : 실사 출력

○ 옥외 안내 유도싸인 (이동형)

- 용도 : 개막식 및 전시장 유도

- 위치 : 추후지정

○ 냉방기 및 환풍기 설치

○ 전시장내 방송시설(마이크 및 스피커 등)

※ 위치 및 규모는 박람회 전시장 구조에 알맞게 적절히 구성 가능

모든 홍보장치물은 실사출력물 부착

5. 유의사항 및 참고사항

○ 2010 진주실크 박람회 장치 및 부스시공 장치물은 3D 작업 후 디자인 검수 받은 후 시공하여야 함

○ 상기 조립식 부스 외 5부스 규모의 자재를 추가로 보유하여 주최측으로부터 추가 부스제작 요청이 있을시 즉각 부스설치를 하여야 함

○ 전시준비 기간 중 출품업체가 추가로 가구 및 비품을 임차요청 할 경우 즉시 임대할 수 있도록 업체전시부스 인근에 비품보관창고를 설치 운영하여야 함

○ 전시기간 중 업체전시관 인근에 현장 책임자급(1명 이상)을 상주케하여 부스 파손 및 손해에 대해 즉시 조치할 수 있도록 하여야 함

○ 상호간판 업체명은 추후 통보

○ 화재 및 안전 사고에 대비하여 전시장 내 소화기 구비 설치 및 보험가입

○ 전시관의 위치가 강이 있는 고수부지이므로 결로현상 등으로부터 전시품의 손상 방지에 만전을 기해야 함

6. 추진절차

사업공고	□	신청․접수	□	평가	□	선정	□
협약체결	□	진도보고	□	전시장 시공	□	보고서제출 및 사업비 정산

7. 신청접수

1) 신청대상

○ 전시기획 및 전시장치 전문시공업체

2) 서류제출

○ 신청마감 : 2010. 8. 10. (화) 18:00까지

○ 신청서 교부 : 한국실크연구원 홈페이지(http://ksri.re.kr)

○ 제출방법 : 방문접수 및 우편접수(당일 도착분에 한함)

○ 구비서류

- 사업신청서 1부

- 사업자 등록증 사본 1부

- 최근 3년간 공사실적 증명서

- 사업계획서 10부 : 한글파일(hwp)이나 파워포인트(PPT)로 제출 가능

- 사업계획서 복사 CD 1장

○ 제출처 : 한국실크연구원 디자인개발팀

- 주 소 : 경남 진주시 상평동 267-3 (우 : 660-904)

8. 전시장치 시공업체 선정

○ 심사 날자 : 별도 통보

○ 심사에 의해 최고 득점 업체를 우선 대상자로 선정, 행사 계획 협의 후 시공업체선정

9. 문의처

○ 한국실크연구원 디자인개발팀 송경자 팀장 : 055-761-7074, 0214